Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/15.889.8, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 31. Statuta općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Konavle na ………. sjednici održanoj dana ………. 2025. godine prihvatilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠAVANJU PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/23, 4/24, 10/24) planiran je u iznosu 4.287.400 €. Nije bilo preraspodjele sredstava proračuna.
Program građenja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu 1.856.113,59 € od čega iz prihoda od komunalnog doprinosa 233.208,23 €, komunalne naknade 83.947,45 €, zaduživanja u iznosu 647.940,92 €, donacija 18.050 €, prihoda od prodaje zemljišta 218.638,42 €, pomoći 24.313,75 €, boravišne pristojbe 25.078 €, te drugih prihoda proračuna 604.936,82 €. 

Članak 2.

GODINA	IZNOS (€)	
IZVRŠENO 2022.	138.375,74,00	
IZVRŠENO 2023.	345.528,89	
PLANIRANO 2024.	4.287.400,00	
IZVRŠENO 2024.	1.856.113,59	

R.
br.	Aktivnost	Opis	Planirana vrijednost	Izvršenje (€)	Izvori sredstava	
I		PROGRAM 2092: 
Gradnja komunalne infrastrukture				
I.1.		Nerazvrstane ceste	Vrsta poslova	2.511.400	533.517,22		
I.1.1.	K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova na području Općine	- izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste sa pratećom cestovnom infrastrukturom:
   - analiza postojećeg stanja cestovne mreže, savjetovanje i izrada prijedloga za područje Cavtata, Oboda i Zvekovice
    - drugi lokaliteti po potrebi 	29.000	17.062,50	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, ostali prihodi proračuna	
I.1.2.	T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i državnih cesta s nadležnim institucijama (ŽUC i Hrvatske ceste) 	- sufinanciranje zajedničkih projekata gradnje sa ŽUC-om: 
izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mosta na dionici L-69057 Dubravka – Debeli brijeg i izmještanje lokalne ceste
- drugi projekti	0	0,00	Komunalna naknada, opći prihodi	
I.1.3.	T209211	Izgradnja nogostupa Poluganje	-	gradnja nogostupa cca 150 metara	0	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi,	
I.1.4.	K209215	Nogostup s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom naselje Zvekovica	-oborinska odvodnja i javna rasvjeta uz nogostup na lokaciji od skladišta građevnog materijala do Oboda duljine 160 m uz državnu cestu 	38.000	2.937,50	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prodaja nefinancijske imovine	
I.1.5.	K209216	Nogostup naselje Čilipi	-izrada projektne dokumentacije za potrebe pripreme i izgradnje nogostupa kroz naselje (prema naselju Popović, od D8 do Masješa cca 2270 metara), rad u fazama (izgradnja u suradnji s ŽUC-om)	205.000	128.104,52	komunalni doprinos, opći prihodi	
I.1.6.	K209219	Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan	- probijanje i tamponiranje 1 km ceste + tamponiranje 700 m već probijene ceste od spoja ŽC 6239 pored Kneževa dvora u Pridvorju do spoja na LC 69053.
Radovi se izvode u fazama.	0	0,00	Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi	
I.1.7.	K209223	Cesta Prahivac	-sanacija ceste (tamponiranje) cca 1,5-2 km 
-izrada projektne dokumentacije 	23.000	0,00	donacija, komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi	
I.1.8.	A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	- geodetski elaborati izvedenog stanja za uknjižbu u katastru i zemljišnim knjigama:	53.200	10.447,82	komunalni doprinos, opći prihodi,	
			- cesta Frana Laureana 	0	2.554,91		
			- Gruda – glavna prometnica kroz naselje nakon asfaltiranja i dovršenje izgradnje kanalizacijskog sustava		0,00		
			-	Domagojeva ulica, Konavoska ulica 		0,00		
			-	Obod (Prečica), Cavtat (Tiha)	20.000	600,00		
			-	Ljuta / Gruda
( Izvor Ljuta, te blizina nogometnog igrališta NK Slaven)	20.000	4.749,16		
			- drugi prioritetni projekti po potrebi	13.200	2.543,75		
I.1.9.	K209229	Sekundarna cesta Mećajac - Jug	Projektiranje i izgradnja	0	0,00		
	- izrada projektne dokumentacije za proširenje ulice Stjepana Radića (dobivena lokacijska dozvola, za paralelnu ulicu, - do dobivanja građevinske dozvole duljine 2 km, I faza	0	0,00	0	
I.1.10.	K209230	Rekonstrukcija raskrižja, dionica ŽC, ulaz prema budućoj  OŠ 	Izrada projektne dokumentacije, uređenje pristupa zemljištu, uređenje pravnih odnos s Županijskom upravom za ceste i drugo	0	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
I.1.11.	K209231	Kružni tok, D8, buduća poduzetnička zona	- izrada projektne dokumentacije i izgradnja	521.700	21.950,00	komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
I.1.12.	K209232	Prometna infrastruktura – buduća poduzetnička zona	- izrada projektne dokumentacije (projekti)
- radovi izgradnje	430.000	0,00	komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
I.1.13.	K209233	Energetska infrastruktura – buduća poduzetnička zona	- izrada projektne dokumentacije (projekti)
- radovi izgradnje	751.500	218.638,42	komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
I.1.14.	K209234	Ulica Stjepana Radića, Cavtat	- rekonstrukcija	0	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada	
I.1.15.	K209235	Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom odvodnjom	- izrada projektne dokumentacije 
- radovi rekonstrukcije	420.000	121.588,96	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi	
I.1.16.	K209236	Cesta Čilipi – Vučje ždrijelo	- izrada projektne dokumentacije	0	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi	
I.1.17.	K209220	Nogostup Čilipi - Zvekovica	Geodetsko snimanje i izrada projekta	40.000	12.787,50	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi	
I.2.		Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		231.700	111.290,06		
I.2.1.	K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: 
- trgovi, plaže, šetnice 		193.700	75.952,56		
I.2.1.a.		-	uređenje plaže i šetnice	-projektna dokumentacija krajobraznog / arhitektonskog uređenja, šetnice, kupališta i luke u Moluntu
- radovi	11.500	11.425,00	komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi	
I.2.1.b.		-	izrada projekta uređenja gradske plaže	-	gradska plaža Cavtat	15.000	0,00	komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi	
		-	izrada projekta uređenja šetnice i nova riva	-	riva
-	Ravnice, Cavtat	15.000	15.525,00	komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi	
		-	uređenje vidikovca	-	Vidikovac Velji do	0	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, turistička pristojba, opći prihodi	
		-	sanacija plaže/ mula 	-	gradska plaža Cavtat 	50.000	29.313,75	komunalni doprinos, komunalna naknada, turistička pristojba, opći prihodi	
		-	sanacija plaže/ mula	-	uređenje mula ispod hotela Cavtat, uređenje platoa ispod vile Banac, uređenje mula ispod ex hotela Makedonija i drugo	102.200	8.937,50	komunalni doprinos, komunalna naknada, turistička pristojba, opći prihodi	
		-	uređenje trga	-	Trg Stravča		10.751,31		
I.2.2.	T209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: 
- ulice, stube 		38.000	35.337,50		
I.2.2.a.		Ulica kneza Domagoja, Cavtat	-  izrada glavnog projekta za rekonstrukciju (rekonstrukcija u fazama) Ulica kneza Domagoja, Cavtat
- radovi u fazama	38.000	35.337,50	komunalni doprinos, opći prihodi	
I.3.		Javna parkirališta 	Vrsta poslova	462.300	333.357,21		
I.3.1.	T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 		462.300	333.357,21		
I.3.1.a.		- uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i na glavni parking s radovima uređenja	- nadzorne kamere parking za kontrolu ulaska/izlaska,
- softver za ručno praćenje parkinga, - postavljanje „pingvina“,
-- drugi radovi	13.000

6.300

5.000

21.000	0

2.317,63

2.050,00

5.005,30	komunalni doprinos,  opći prihodi	
I.3.1.b.		-	uređenje parkirališta Tiha	Radovi na parkiralištu Tiha	417.000	320.109,28	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od pridaje imovine	
I.3.1.c.		-	parkiralište Sveta nedjelja Čilipi	Izrada projektne dokumentacije za proširenje	0	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od pridaje imovine	
I.3.1.d.		-	parking ambulanta Cavtat	otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije	0	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od pridaje imovine	
I.3.1.e.		-	parking Gruda	projekt uređenja		2.625,00	komunalna naknada, opći prihodi	
I.3.1.f.		-	parking Zvekovica uz Ž6239 	projekt i troškovnik uređenja		1.250,00	komunalna naknada, opći prihodi	
I.4.		Javne garaže 					
-	-	-	-	-		-	
I.5.		Javne zelene površine	Vrsta poslova	155.000	75.796,56		
I.5.1.	A209226	Javne zelene površine: uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda		155.000	75.796,56		
		- dječje igralište Vodovađa 	- građevinski radovi uređenja
- opremanje	40.000	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći	
		 -dječja igrališta Pločice	- građevinski radovi uređenja
- opremanje	0	0,00	komunalni doprinos, opći	
		 -dječje igralište Palje brdo	- građevinski radovi uređenja
- opremanje	50.000	19.556,25	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći	
		 -dječje igralište Molunat	- građevinski radovi uređenja
- opremanje	0	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći	
		 -dječje igralište Močići	- građevinski radovi uređenja
- opremanje		0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći	
		 -dječje igralište Gruda (kod nog.igrališta)	- građevinski radovi uređenja
- opremanje	20.000	0,00	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći	
		 -dječje igralište Zvekovica	- građevinski radovi uređenja
- opremanje	15.000	17.473,13	komunalni doprinos, komunalna naknada, opći	
		 -igrališta dječji vrtići,
 drugo po zahtjevu i mogućnostima	- građevinski radovi uređenja
- opremanje	70.000	38.767,18	komunalni doprinos, opći	
I.6.		Građevine i uređaji javne namjene	Vrsta poslova	52.500	5.465,50		
I.6.1.	T209212	Građevine i uređaji javne namjene: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina
- nabava novih klupa	- opremanje (nabava novih klupa šetnica Rat i Tiha)	7.000	5.465,50	komunalni doprinos	
I.6.2.	A209225	Građevine i uređaji javne namjene: -autobusna stajališta i nadstrešnice	- pripremni radovi za postavljanje autobusnih čekaonica, 
- nabava i postavljanje čekaonica 
- Vitaljina, Đurinići, Drvenik, Uskoplje, Močići, betonske čekaonice	45.500	0,00	komunalni doprinos, opći prihodi	
I.7.		Javna rasvjeta	Vrsta poslova	834.500	783.412,04		
I.7.1.	K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	proširenje mreže javne rasvjete:
- Cavtat: zamjena drvenih stupova oko Rata,
S obzirom da se tijekom godine obavlja rekonstrukcija javne rasvjete na području Konavala, drugi radovi rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete bi se obavljaju po potrebi / uviđaju na terenu, a tu su uključene pojedinačne lokacije:
- Vitaljina: kod obiteljskih kuća;
- Đurinići donji -  autobusna stanica,
-Molunat: - parking -igralište,
- Cavtat: Ulica Juraja Dalmatinca, Konavoska ulica, Ključice, Ulica S.S. Kranjčevića – Sarajevsko naselje, 
- Čilipi - kod više obiteljskih kuća
- Močići – kraj obiteljskih kuća,
- Dunave, kod obiteljskih kuća 
- Donja Duba: kod obiteljskih kuća 
- Poljice: od Crkve Sv.Ane do autobusne postaje
- Pridvorje: - kod obiteljskih kuća i kod Kneževa dvora i Samostana
- Popovići: kod obiteljskih kuća 
- Zvekovica, kod obiteljskih kuća i trgovina,
-Obod – Baletinova ulica i drugo.	90.000	66.643,62	komunalni doprinos,
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
I.7.2.	K209204	Rekonstrukcija javne rasvjete: Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete	- rekonstrukcija i usluge nadzora
(procijenjeni obim radova
sveukupno cca 3.100 kom rasvjetnih tijela na cjelokupnom području Općine)
- rekonstrukcija javne rasvjete igrališta	

669.500

75.000	

657.278,42

59.490,00	opći prihodi, komunalni doprinos, komunalna naknada, primici od zaduživanja	
I.8.		Groblja i prateći objekti	Vrsta poslova	40.000	13.275,00		
I.8.1.	T209221	Proširenje groblja Gruda (izgradnja socijalnih grobnih mjesta)	- izgradnja 3 grobnice (socijala)
- projekt uređenja	

10.000	

2.562,50	komunalni doprinos, komunalna naknada, donacija 	
I.8.2.	T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom (mrtvačnica, grobnica)	 - uređenje parka ispod Mauzoleja
- izrada projektne dokumentacije uređenja prostora oko Mauzoleja prema smjernicama konzervatorskog odjela
- oprema / radovi	10.000

20.000

0
	3.812,50

6.900,00

0
	komunalni doprinos,  turistička pristojba, prihod od prodaje nefinancijske imovine,  turistička pristojba	
Ukupno Program 2092	4.287.400	1.856.113,59		

Rashodi najvećeg broja projekata i aktivnosti unutar programa građenja komunalne infrastrukture izvršeni su manje od plana. Općina ima osigurana sredstva od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni za radove i izradu projektne dokumentacije što najvećim dijelom nije iskorišteno. Naime, cjelokupan postupak radova je ovisio o izmještanju VOR-a u području buduće poduzetničke zone, odnosno radovima čiji izvršenje je ovisilo o odobrenju zračne luke. Također, za dio ugovorenih radova / izrade projekata nisu ispostavljeni računi jer nisu bili dovršeni u 2024. godini te su rashodi manji od planiranih.

I.1.	Nerazvrstane ceste	

K209202: Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 29.000 €. U okviru ovog projekta planiraju se rashodi za otkupe zemljišta za ceste, izradu projektne dokumentacije te manja pojedinačna ulaganja u proširenje / rekonstrukciju dijela postojećih cesta (izrada projekta za potrebe izgradnje nogostupa na lokaciji Zvekovica, analiza postojećeg stanja cestovne mreže za područje Oboda, Zvekovice i Cavtata i drugo). Rashodi su izvršeni u iznosu 17.062,50 € ili 58,8 % plana. Rashodi su manji od planiranih jer nije okončana analiza postojećeg stanja cestovne mreže.

Rashodi u 2024. godini su izvršeni u iznosu 17.062,50 € i odnose se na:
-	analiza postojećeg stanja cestovne mreže Cavtat – Obod – Zvekovica 9.937,50 € (2.i 3. situacija na temelju ugovora iz 2023.),
-	idejno rješenje i troškovnik radova za uređenje nogostupa u Tušićima 500 €.

K209215: Nogostup naselje Zvekovica – u sklopu projekta u planirani rashodi u iznosu 38.000 €. Planira se urediti nogostup s javnom rasvjetom na dužini 160 m, a u okviru projekta je planirana rekonstrukcija vodovodne mreže i postavljanje kanalizacije, te rješavanje oborinske odvodnje. Izvršeni rashodi u iznosu 2.937,50 € se odnose na izradu projektne dokumentacije nogostupa uz D8 od vijadukta Obod do raskrižja Zvekovica prema uputama Hrvatskih voda. Rashodi su izvršeni manje od plana jer Hrvatske vode nisu započele projekt uređenja nogostupa u okviru kojeg bi Općina sufinancirala radove oborinske odvodnje i javne rasvjete.

K209216: Nogostup naselje Čilipi – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 205.000 €. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Planira se urediti nogostup kroz naselje (prema naselju Popovići, od D8 do Masješa cca 2270 metara). 

Rashodi su izvršeni u iznosu 128.104,52 € i odnose se na:
-	radovi na izradi nogostupa i rasvjete uz D8 preko puta izlaza iz zračne luke u iznosu 78.077,78 € (na temelju ugovora iz veljače 2024.godine i dodatka ugovoru iz srpnja 2024. godine), a odnose se na: nabavu i postavljanje čekaonice 6.250 €, postavljanje javne rasvjete 23.016,69 €, nogostup 48.811,09 €,
-	radovi na gradnji nogostupa kroz mjesto Čilipi uz dio ŽC 6240 u iznosu 16.901,74 € (faza I, ukupna dužina 230,87 m, ugovor od 19.11.2024. u iznosu 82.931,25 €),
-	projektna dokumentacija nogostupa uz ŽC6240 od D8 do ulice Masješi u iznosu 33.125 € (ugovor iz prosinca 2023.).

K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 40.000 €. Projekt izgradnje nogostupa bi se odvijao u fazama, a trebao bi se odvijati u suradnji s Hrvatskim cestama. Rashodi su izvršeni manje od plana jer nije ispostavljena okončana situacija za izvedbeni projekt nogostupa.

U 2024. su izvršeni rashodi u iznosu 12.787,50 € i odnose se na:
-	izradu geodetskog snimka poprečnih profila ceste od raskrižja na Zvekovici do ulaza Ina, avio servis Zračne luke u iznosu 6.187,50 € (ugovor iz rujna 2024.).Ukupna duljina trase je cca 2.300 metara; 
-	izradu izvedbenog projekta jednostranog nogostupa uz državnu cestu D8 od naselja Zvekovica do Zračne luke u iznosu 6.600 € na temelju ugovora iz listopada 2024. godine (ugovor 33.000 € s porezom na dodanu vrijednost).

T209223: Cesta Prahivac  – u sklopu projekta planira se uknjižba zemljišta, te rekonstrukcija i sanacija ceste. Rashodi su planirani u iznosu 23.000 €, a nisu izvršeni. Nisu izvršeni planirani rashodi jer nisu ispostavljeni računi za izradu projektne dokumentacije za koju su zaključeni ugovori. 

A209227: Aktivnosti u svezi evidentiranja i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige  – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 53.200 €. Ovi rashodi se odnose na izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja, evidentiranje i uknjižbu u katastru i zemljišnim knjigama. Poslovi će se izvoditi u fazama. Rashodi su izvršeni u iznosu 10.447,82 € ili 19,6 %. Planirane su izrade geodetskih elaborata za ulice Kneza Domagoja i Frana Laureana u Cavtatu, te drugo.

Rashodi u 2024. su izvršeni u iznosu 10.447,82 € i odnose se na:
-	usluge odvjetnika u postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa na nekretnini k.č. 1957 k.o. Obod (svojstvo nerazvrstane ceste) u iznosu 600 € (ulica na Obodu, ispod ceste, Prečica),
-	izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu broj 37 u naselju Cavtat s Obodom na kč 639/16, 639/18, 639/20, 639/66, 639/75 k.o. Ct (NI), odnosno na č.zem. 699/16, 699/18, 699/19, 699/20, 699/64, 699/69 k.o. Cavtat (stara izmjera) u iznosu 1.668,75 € (ulica Stjepana Radića / Vlatka Mačeka), 
-	izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste br.3 Ljuta, k.č. 1369, 159,158,157,137,138,140,141, č.zgr 30 u iznosu 961,66 € (Vrelo – Njirići),
-	izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu broj 31 u Gruda, kč.zem. 2080, 2082/1, 2082/3, 2084/1, 2084/2, 2088/2, 2089/1, 2095, 2097, 2405, 2408 k.o. Gruda u iznosu 3.162,50 € (kod nogometnog igrališta Gnjile),
-	izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu broj 47 "Cavtat s Obodom" na k.č. 377/3, 382/1, 383/1, 383/10, 383/11,383/17, 383/39, 383/41, 383/42 u k.o. Cavtat (nova izmjera), odnosno č.zem. 442/1, 449/1, 4449/8, 449/13, 449/38, 449/40, 449/41, 1061/5 k.o Cavtat (stara izmjera) u iznosu 2.554,91 € (ulica Frana Laureana),
-	izrada geodetskog situacijskog snimka stvarnog stanja u svrhu projektiranja na čestici 2413 k.o. Gruda (nerazvrstana cesta uz nogometno igralište Gnjile) u iznosu 625 €, te 
-	geodetski situacijski snimak raskrižja ulica Put od Cavtata, Frankopanska i Ljudevita Gaja u iznosu 875 €. 

Postupak evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima i provoditi će se više godina. Rashodi su izvršeni manje od planiranog jer izrada drugih elaborata i postupci evidentiranja upisa nisu mogli bili ugovoreni zbog zauzetosti drugim projektima / aktivnostima i zauzetosti ovlaštenih inženjera.

T209231: Kružni to, D8, dva ulaza, buduća poduzetnička zona  – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2024. je planirano 521.700 €, dok je za 2025. kao i za 2026. godinu planirano 1.050.000 €.

Rashodi za 2024. su izvršeni u iznosu 21.950 € i odnose se na izradu geodetskih podloga na temelju ugovora iz rujna 2023. godine (duljina zahvata cca 1600 metara, geodetska situacija postojećeg stanja) i idejnog rješenja prometnica s infrastrukturom u poslovnoj zoni Čilipi (prometnica duljine cca 1600 metara, a u sklopu projekta rješava se oborinska odvodnja s glavne prometnice, fekalna odvodnja, vodoopskrbni priključak, javna rasvjeta i TK infrastruktura, tip prometnice broj 3 sukladno UPU-u, tj. dvije prometne trake po 3,5 m i nogostup širine 3 m). Rashodi su izvršeni u ugovorenoj vrijednosti.

Drugi rashodi nisu izvršeni, a bili su planirani u visini raspoloživih sredstava od prodaje dijela čestica zemljišta unutar poduzetničke zone. 

T209232: Prometna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone  – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2024. je planirano 430.000 €, dok je za 2025. planirano 1.610.000 €, a za 2026. je planirano 1.500.000 €. Rashodi za 2024. nisu izvršeni, a bili su planirani u visini raspoloživih sredstava od prodaje dijela čestica zemljišta unutar poduzetničke zone (početak je ovisio o izmještanju sustava navigacije unutar poduzetničke zone, te o izradi projektne dokumentacije).

T209233: Energetska infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone  – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2024. je planirano 751.500 €, dok je za 2025. planirano 430.000 €, a za 2026. je planirano 150.000 €.

Rashodi za 2024. su izvršeni u iznosu 218.638,42 € i odnose se na predujam za financiranje i izgradnju elektroenergetskih objekata potrebnih za priključenje građevina na lokaciji buduće poslovne zone sukladno ugovoru o priključenju koji je zaključen s HEP-om, Operator distribucijskog sustava, Elekrojug Dubrovnik. Ugovor je zaključen u srpnju 2024. godine u iznosu 312.340,60 €. Plaćena su dva obroka ugovora, dok će treći obrok ugovora u visini preostalih 30% vrijednosti ugovora odnosno 93.702,18 € trebati platiti najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

Drugi rashodi za 2024. nisu izvršeni, a bili su planirani u visini raspoloživih sredstava od prodaje dijela čestica zemljišta unutar poduzetničke zone (početak je ovisio o izmještanju sustava navigacije unutar poduzetničke zone, te o izradi projektne dokumentacije).

T209235: Put dr. Ante Starčevića, Cavtat  – u sklopu projekta su planirani rashodi izrade projektne dokumentacije te radovi rekonstrukcije ceste s oborinskom odvodnjom. Za 2024. je planirano 420.000 €.

Rashodi za 2024. su izvršeni u iznosu 121.588,96 € i odnose se na:
-	radove na uređenju prometnice i odvodnje dijela ulice Trumbićev put duljine 65 metara i Obala dr. Ante Starčevića duljine cca 500 metara u iznosu 104.172,90 € (ugovor iz veljače 2024. godine u iznosu 335.968,66 €). U veljači 2024. godine je zaključen dodatak ugovoru kojim se produžuje rok završetka radova. U prosincu 2024. zaključen je drugi dodatak ugovoru kojim je utvrđeno da se predmetni radovi obavljaju unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline Cavtata i uvažavajući smjernice posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela, sukladno čemu će se radovi nastaviti nakon izrade izmjene i dopune glavnog projekta, te je pretpostavljen završetak radova do 15.2.2026.
-	nadzor nad radovima uređenja prometnice i odvodnje u ulici Obala dr. Ante Starčevića u iznosu 3.100,68 €, te
-	okončanu situaciju za izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice i odvodnje dijela ulice Trumbićev put duljine 65 metara i Obala dr. Ante Starčevića duljine cca 450 metara u iznosu 14.125 € (sukladno ugovoru iz kolovoza 2023. godine koji je bio zaključen u ukupnoj vrijednosti 32.875 €). 

I.2.	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	

K209201: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trg, šetnica, plaža i sl.) – Proračunska sredstva planirana su u iznosu 193.700 €. Planirani rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije krajobraznog / arhitektonskog uređenja šetališta, kupališta i luke u Moluntu, te na idejno rješenje uređenja turističke infrastrukture šetnice Rat u Cavtatu, kao i projekt uređenja gradske plaže u Cavtatu. Narednih godina se planiraju radovi uređenja spomenutih lokacija, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava.

U 2024. godini su izvršeni rashodi za:
-	sanaciju oštećenog mula na gradskoj plaži u Cavtatu u iznosu 24.313,75 € (na temelju ugovora iz svibnja i dodatka ugovoru iz kolovoza 2024.),
-	izradu ograde na gradskoj plaži u Cavtatu u iznosu 2.812,50 €, nabavu i montažu konopa i blokova s plutačama na gradskoj plaži u Cavtatu 1.250 €, 
-	nadzor na radovima sanacije plaže u Cavtatu 937,50 €, 
-	idejni projekt uređenja obalne šetnice u Moluntu 11.425 € (na temelju ugovora iz 2023.), 
-	izradu idejnog rješenja uređenja gradske plaže Račić u Cavtatu u iznosu 8.500 € (na temelju ugovora iz ožujka 2024.),
-	idejno rješenje i troškovnik sanacije plaže ispred vile Banac u iznosu 437,50 €, 
-	izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje s 3D vizualizacijom i ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja s koordinacijom s javnopravnim tijelima) i troškovnika za uređenje pretovarne zone na autobusnom kolodvoru u Cavtatu u iznosu 4.375 € (na temelju ugovora iz veljače 2024.), 
-	izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje s 3D vizualizacijom i ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja s koordinacijom s javnopravnim tijelima) i troškovnika za uređenje prostora ispred hotela Supetar u Cavtatu u iznosu 5.000 € (na temelju ugovora iz veljače 2024.), 
-	izradu projektne dokumentacije (idejni projekt s 3D vizualizacijom, ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja s koordinacijom s javnopravnim tijelima, glavni projekt, ishođenje potvrda na glavni projekt) i troškovnik građevinsko obrtničkih radova za uređenje platoa na predjelu „Ravnica“ u Cavtatu u iznosu 6.150 € (na temelju ugovora iz veljače 2024. u iznosu 10.250 €), 
-	radove na uređenju trga na Stravči (materijal za uređenje trga, kamenorezački radovi) u iznosu 10.751,31 €.
Rashodi su manji od planiranih jer su radovi sanacije platoa ispred vile Banac zbog vremenskih uvjeta preneseni u 2025. godinu.

T209224: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – ulice, stube i sl.  – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 38.000 €. Ovi rashodi se odnose na provedbu arheoloških istraživanja, te izradu glavnog projekta rekonstrukcije ulice kneza Domagoja, Cavtat. Rashodi su izvršeni u iznosu 35.337,50 € ili 93% plana.

U 2024. godini izvršeni rashodi se odnose na:
-	elaborat mjera zaštite konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra - zaštita ostataka zida antičkog vodovoda uz Ulicu Kneza Domagoja u Cavtatu, k.č. 346 k.o. Cavtat u iznosu 3.062,50 €,
-	izradu projektne dokumentacije za uređenje / sanaciju Ulice kneza Domagoja i Konavoske ulice u Cavtatu u iznosu 32.275 € (izrađeno idejno rješenje, glavni projekt, te troškovnik radova sukladno ugovoru iz prosinca 2023.).

I.3.	Javna parkirališta 	

T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 462.300 € i odnosila su se na radove investicijskog održavanja i uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i ulaska na glavni parking Cavtat – proširenje parkinga, ažuriranje računalnog rješenja, softver za ručno praćenje parkinga i luke. Rashodi u 2024. su izvršeni u iznosu 333.357,21 €. Rashodi su izvršeni u manjem iznosu jer nisu dovršeni radovi izgradnje i opremanja parkinga u Tihoj.

Rashodi u 2024. su izvršeni u iznosu 333.357,21 €, a odnose se na:
-	nabavu i postavljanje arli za postojeći parking u Cavtatu 4.005,30 €,
-	novelaciju izvedbenog projekta parkirališta u centru naselja Gruda 2.625 €,
-	nabavu i ugradnju parking separatora na postojećem parkingu u Cavtatu 2.050 €, 
-	usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova uređenja parkinga u Cavtatu 1.000 €,
-	izradu projekta i troškovnika radova za uređenje parkirnih mjesta uz Ž6239 u naselju Zvekovica 1.250 €, 
-	kapitalnu pomoć društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) u iznosu 2.317,63 € (sredstva za nabavu kamere za postavljanje na parking u centru Cavtata i termalni validator parkirnih karata – glava validatora),
-	radove izgradnje parkinga u Tihoj u iznosu 318.234,28 €, te 
-	usluge nadzora nad izvođenjem radova u Tihoj 1.875 €. 

Radovi izgradnje parkinga u Tihoj tijekom 2024. u iznosu 318.234,28 € se odnose na:
-	pripremne radove na projektu uređenja parkinga u ulici Bogišićeva Tiha u Cavtatu (sječa, ravnanje i priprema terena, uklanjanje drveća i panjeva, iskolčenje trase) u iznosu 34.147,50 € (ugovor iz prosinca 2023.)
-	radove iskopa i izrada armirano betonske konstrukcije zida u iznosu 82.418,75 € (ugovor iz veljače 2024.),
-	radove uređenja parkinga u iznosu 201.668,03 € (ugovor iz srpnja 2024., te dodatka ugovoru iz listopada 2024.). 

I.5.	Javne zelene površine	

T209226: T209226: Javne zelene površine: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda  – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 155.000 €. Ovi rashodi se odnose na pripremne radove uređenja, te nabavu i opremanje dječjih igrališta diljem Općine. Rashodi su izvršeni u iznosu 75.796,56 € ili 48,9 % plana. Rashodi su izvršeni manje od planiranog jer do konca 2024. godine nisu dovršeni radovi na opremanju dječjeg igrališta u Paljem brdu, a nisu započeti radovi uređenja igrališta na Grudi. 

Rashodi u 2024. su izvršeni u iznosu 75.796,56 €, a odnose se na:
-	radove i opremu za dječje igralište, vrtić Cavtat, centar u iznosu 17.880,18 €,
-	uređenje i opremanje dječjeg igrališta na Zvekovici 17.473,13 €, 
-	zamjenu opreme na igralištu u Stravči 207,50 €, 
-	postavljanje antitraumatske podloge na dječjem igralištu vrtića u Čilipima 4.858,75 €, 
-	uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Dubravci, Potok u iznosu 15.820,75 €,
-	radove pripreme terena i uređenja terena za dječje igralište u Paljem Brdu 19.556,25 €. 

I.6.	Građevine i uređaji javne namjene	

T209212: Građevine i uređaji javne namjene: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina – u sklopu projekta su planirana sredstva za nabavu novih klupa i druge opreme na javnim površinama u iznosu 7.000 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 5.465,50 € i odnose se na kapitalnu pomoć društvu u vlasništvu Općine za nabavu materijala za izradu baroknih klupa (6 klupa postavljeno na novo uređenu rivu u Cavtatu). Rashodi su izvršeni u manjem iznosu jer je radove nabave materijala, kao i usluge postavljanja obavilo društvo u vlasništvu Općine kojemu su sredstva kapitalne pomoći za nabavu prenesena u iznosu koji je umanjen za iznos poreza na dodanu vrijednost.

T209225: Građevine i uređaji javne namjene – autobusna stajališta, nadstrešnice  – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 45.500 €. Ovi rashodi se odnose na nabavu i postavljanje autobusnih čekaonica na više mjesta diljem Općine. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je održavanje autobusnih čekaonica, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Općine, na samim autobusnim ugibalištima. Rashodi nisu izvršeni. U 2024. godini nisu postavljane nove čekaonice, a planirano postavljanje čekaonica ovisi o dobivanju svih potrebnih dozvola od nadležnih tijela (Hrvatske ceste, Županijske ceste).

I.7.	Javna rasvjeta	

K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se za proširenje javne rasvjete u iznosu 90.000 € sukladno Programu gradnje, zaprimljenim zahtjevima i potrebama. Rashodi su izvršeni u iznosu 66.643,62 € i odnose se na:
-	postavljanje rasvjete i reflektora na boćarskom igralištu kod hotela Albatros u iznosu 8.352,88 €,
-	postavljanje rasvjete na više mjesta diljem Općine: trg u Stravči 5.150 €, Zvekovica (Put Uskoplja, kod restorana, Ulica odvojak) 2.827,33 €, Močići (kod skretanja za zračnu luku i u blizini obiteljske kuće) 9.316,13 €, Gruda (Bačev do) 1.662,50 €, Čilipi 475 €, Zastolje 737,50 €, Đurinići 650 €, Mihanići 4.050 €, Poljice – kod doma kulture 1.312,50 €, Duba konavoska 1.443,75 €, Cavtat – Put od Cavtata 7.194,56 €, Dubravka – Butkovina 1.337,50 €, Đurinići – kod autobusne postaje 1.818,75 €, Zastolje 2.316,95 €, Popovići 802,50 €,
-	postavljanje javne rasvjete na novoizgrađenom dječjem igralištu u Paljem brdu u iznosu 10.682,69 €, dječje igralište Konavosko polje 3.134,08 €, kružni tok Ljuta 2.200 €, 
-	javnu rasvjetu za boćarsko igralište Dubravka 1.189 €. 

K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) - u sklopu projekta rashodi su planirani rashodi u iznosu 744.500 €. U okviru ovog projekta planirana je rekonstrukcija javne rasvjete kroz projekt povećanja učinkovitosti sustava zamjenom postojećih rasvjetnih tijela novim i učinkovitijim. 

Ugovor o izvođenju radova modernizacije javne rasvjete je zaključen u studenom 2023. godine (Proditus d.o.o.) u iznosu 611.445,08 € s PDV-om. Zbog ratnih događanja u Crvenom moru i poremećenih trgovinskih putova (viša sila – promjena plovidbe umjesto kroz Sueski kanal ruta oko Rta dobre nade i Afrike čime je produljen rok dobave rasvjetnih tijela), odobreno je produljenje roka izvođenja radova, a zbog uočenih stanja na terenu (nepristupačna mjesta s privatnih parcela) odobreno je drugačije postavljanje javne rasvjete na više lokacija te su rashodi dodatkom ugovoru uvećani za 15.900 €, odnosno ukupno 627.345,08 €. Radovi u 2024. godini su izvršeni u iznosu 636.340,91 €.
Ugovor o nadzoru radova na projektu modernizacije javne rasvjete (postavljanjem energetski učinkovitih rasvjetnih tijela) zaključen je u studenome 2023. godine u iznosu 11.600 € (s porezom na dodanu vrijednost) (Magister d.o.o.). Rashodi za nadzor su izvršeni u iznosu 11.600,01 €.

Pored navedenog, u okviru ovog projekta izvršeni su rashodi za:
-	izradu tehničke dokumentacije energetske obnove sportskih i dječjih igrališta na 17 lokacija u Općini (snimak terena i postojeće instalacije, prijedlog energetske obnove) u iznosu 5.250,00 € (ugovor iz srpnja 2024.),
-	najam autokošare za potrebe izvođenja radova modernizacije javne rasvjete u iznosu 6.937,50 €,
-	zbrinjavanje fluorescentnih žarulja iz projekta rekonstrukcije javne rasvjete 2.400 €, 
-	nabavu rasvjetnih tijela za energetsku obnovu 17 igrališta diljem Općine I faza u iznosu 24.920 € (ugovor iz kolovoza 2024.),
-	elektrotehnički radovi postavljanja reflektora na sportskim igralištima 28.070 € (ugovor iz listopada 2024.),
-	usluge nadzora elektroinstalacija energetske obnove igrališta I faza u iznosu 1.250 €.

I.8.	Groblja i prateći objekti	

T209221: Proširenje groblja Gruda – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 10.000 €, a izvršeni su u iznosu 2.562,50 € ili 25,6% plana. Rashodi su izvršeni manje od plana jer u 2024. godini nije izrađena cjelovita projektna dokumentacija za proširenje groblja.

Izvršeni rashodi u 2024. se odnose na izradu geodetskog snimka stvarnog stanja u svrhu proširenja groblja, zahvat mrtvačnice Gruda, na č.zem. 377/1 k.o. Gruda u iznosu 1.000 €, te na izradu projekta i troškovnika radova za dogradnju groblja u naselju Gruda u iznosu 1.562,50 €. 

T209222: Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom – u sklopu navedenog projekta je planirano uređenje parka oko mauzoleja u vrijednosti 30.000 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 10.712,50 € što čini 35,7% projekta. Rashodi su izvršeni manje od planiranog jer su manje od planiranog izvršeni rashodi za izradu projektne dokumentacije. 

Rashodi 2024. su izvršeni u iznosu 10.712,50 € i odnose se na:
-	formiranje vrtne staze oko mauzoleja Račić u Cavtatu u iznosu 3.812,50 €,
-	izradu idejnog projekta s 3D vizualizacijom u iznosu 6.900 € (ugovor iz veljače 2024. u iznosu 11.500 € za izradu projektne dokumentacije za uređenje prostora oko mauzoleja Račić i groblja Svetog Roka u Cavtatu: izrada idejnog projekta, ishođenje posebnih uvjeta, glavni projekt – arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt instalacije vodovoda i kanalizacije, projekt elektrotehničkih instalacija, elaborat krajobraznog uređenja; troškovnih građevinsko obrtničkih radova, te ishođenje potvrda na glavni projekt).

Članak 3.

Ovo Izvješće će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Konavle". 

KLASA: 
URBROJ: 
U Cavtatu, 

Predsjednik Općinskog vijeća

   Ivo Simović